황지자유시장 주차환경 개선사업

지역경제담당	정진주	담당자	김주옥

□ 사업개요

❍ 사 업 명: 황지자유시장 주차환경개선사업

❍ 위    치: 태백시 황지동 33-3외 2필지(황지자유시장 제1주차장)

❍ 사 업 비: 9,300백만원(국비 5,400 도비 1,080 시비 2,820)

❍ 사업기간: 2020. 1. ~ 2022. 8월중 준공예정

❍ 사업내용: 기존 주차장 철거후 철골콘크리트 주차장 신축

❍ 사 업 량	(단위: ㎡)

주용도	위 치	방 법	주구조	대지면적	건축면적	연면적	사업량
자동차 관련 시설 (주차장)	황지동 33-3	기존 주차장 철거 및 신축	철골+철근콘크리트, 철골조	1,652	1,133.73 (건폐율 68.63%)	5,830.76	지상5층6단, 주차면수160면
	황지동 33-36	기존 건물 철거 및 신축
	황지동 33-39

□ 추진실적

❍ 설계용역준공(2021.4.20.)
- 경관심의(2021.2.27.), 건축허가수리(2021.3.30.),
BF예비인증(2021.3.31.), 일상감사 및 계약심사(2021.4~5.6.)

❍ 기존 주차장 해체(철거)준공(2021.9.10.)
- 재활용시설 주차관제․CCTV이설(2021.6월), 석면등 철거준공, 도로점용승인,    가로수제거 등(2021.6~7월), 공사중지(2021.8.13.)

❍ 공사5건․용역4건 재착공(2021.10.13.)
- 지적불부합지 정리(2021.9.7.), 매장문화재 표본조사(2021.9.3.)

□ 향후 추진계획

❍ 황지자유시장 주차환경개선 준공예정: 2022. 12월중

웰니스 항노화산업 특화단지 조성사업 추진

신사업개발담당	이강호	담당자	맹홍민

○ 체육 종목 별 맞춤형 재활치료, 노화예방․치매 치료 등 복합 헬스케어센터

건립을 통한 미래성장 산업육성

○ 관내 천연 자원을 활용 융․복합 특화단지 조성을 통한 천연치유물 제조산업

입주 유치 등 6차 산업형 명품 항노화 도시 조성

□ 사업개요

❍ 위    치: 태백시 문곡동 산30번지 일원

❍ 사 업 비: 86,940백만 원

❍ 사업면적: 774,830㎡

❍ 사업내용: 웰니스 항노화산업 특화단지 조성(복합헬스케어센터,

하늘길, 치유숲) 및 면역특구 지정(테라피팜, 항노화

생산공방, 치료센터, 힐링빌리지)

□ 사업구조

❍ 총괄: 단계별 사업추진(힐링 서비스 → 테라피 팜 → 항노화 공방)

1단계(스포츠‧시니어‧명상케어

및 테라피 체험 센터)

제조

공장

힐링

서비스

테라피팜 및

R＆D센터

항노화 공방 및 치료센터

2단계(제약   회사 등)

3단계(면역특구지정)

❍ 복합 헬스케어 센터(케어 서비스)

면역센터

시니어 헬스케어센터

□ 추진실적

❍ 시니어헬스케어센터 건립 219억 원 강원랜드 이사회 의결 -----‘20. 3.

❍ 강원랜드 노인요양사업 입지타당성용역(사배리골 확정) ----‘20. 8.

❍ 사업대상지 주민설명회(3회) ---------------------- ‘20. 8.~11.

❍ 사업구역지정, 기본 및 실시계획용역 일괄 착수(33억 원/ 20개월) ---- ‘20. 9.

❍ 동부산림청 사업참여 및 국유림 사용방안 협의(청장면담) ---‘20. 11.

❍ 사업대상지 지적측량 및 물건조사 ------------‘20. 11.~‘21. 1.

❍ 사업대상지 환경영향평가(15개월) -------------‘20. 11. ~‘22. 3.

❍ 한방병원 본부장, 바이오 회사 등 회의 및 현장답사(4회) ----‘21. 1.~2.

❍ 사업기본계획, 기본 및 실시설계 용역 착수보고회 ------‘21. 3.

❍ 서울대 산하 벤처기업 바이오 연구센터 건립관련 현지실사 --‘21. 4.

❍ 동해안 및 내륙권 발전사업지원 국비신청(200억 원) ------‘21. 4.

❍ 공유재산심의 및 공유재산관리계획 의결 ---------------‘21. 4.

❍ 지역균형뉴딜 공모사업 신청 및 균형발전위원회 업무협의 --‘21. 4.

❍ 강원도 및 원주 환경청 환경영향평가 등 업무협의 --------‘21. 5.

❍ 면역특구 조성관련 제약사 등 업무협의(E, J사) -----‘21. 5 ~ 6.

❍ 동부산림청장, 환경청 환경평가과장, 강원도 경제진흥국장 현장점검 ---‘21. 7.

❍ 환경영향평가 및 사업구역 및 시행자 지정 신청 --------‘21. 7.

❍ 1차 지장물 조사 등 행정절차 진행 ----------------‘21. 7. ~ 8.

❍ 대마(HEMP) 산업화 추진협의체 신청 및 농식품부 업무협의--‘21. 9.

❍ 강원도 및 산림청 업무협의(사업구역 지정 및 국유림 협의 등) 4회 ---‘21. 10.

❍ 한방병원 병원장 항노화산업 투자관련 업무협의 -------‘21. 10.

❍ 2차 지장물 조사 등 행정절차 및 주민협의 ------------‘21. 11.

□ 향후 추진계획

사업구역 신청 및 승인	⇨	사업대상지 감정평가 및 보상	⇨	원형지 공급계약 (강원랜드)	⇨	실시 계획작성 및 승인	⇨	기반조성 공사발주	⇨	공사 완공
`21.7. ~ 12		`21.11.~12		`21.12.		`22.1.~`22.11.		`22.12.		`25.12.

❍ 지장물 조사 등 보상관련 행정절차 추진 -------------‘21. 11. ~

❍ 사업대상지 보상 예산편성 요구 ----------------------‘21. 12.

❍ 실시계획 작성 및 승인 -----------------------‘22. 1.~‘22. 11.

❍ 사업대상지 기반조성 공사 발주 및 준공 ----‘22. 12.~‘25. 12.

고원 힐링 캠핑장 조성

관광개발담당	이문형	담당자	이상수, 신효선

○ 자연환경을 활용한 사계절 힐링 공간 마련으로 지역 관광수입 창출

○ 경쟁력있는 관광시설 조성으로 지역경제 활성화 기반 마련

□ 사업개요

❍ 사업추진 근거: 「강원도 폐광지역 중장기 발전 기본계획」

❍ 사업기간: 2020~2022년(3년)

❍ 총사업비: 7,662백만 원(도비 5,512, 시비 2,150)

❍ 사업내용

- 야영시설: 고정식 카라반, 이동식 카라반, 백 패킹(데크)

- 여가시설: 산림욕장, 단풍아트원, 산채원, 다목적운동장, 물놀이장

- 관리시설: 관리동, 화장실, 샤워실, 주차장

- 부대시설: 상하수도, 전기, 진입도로, 조경 등 기타시설

□ 추진실적

❍ 사업추진 방침 결정	2020. 7.

❍ 도시계획시설(공원) 결정 용역	2020. 10.~2021. 12.

- 환경영향평가, 재해영향성검토 용역 병행 실시

❍ 감정평가 실시	2021. 5.

- 손실보상금(토지 + 지장물 + 주거 이전비 등): 1,936백만 원

❍ 도시계획심의 상정 사전협의 완료(강원도)	2021. 10.

□ 향후 추진계획

❍ 손실보상 협의	2021. 10.~2022. 2.

❍ 기본 및 실시설계용역	2021. 11.~2022. 2.

❍ 조성공사 추진	2022. 3.~2022. 12.

창의(기적의) 놀이터 조성사업

담당자	이현우	도시개발 담 당	이창근

○ 기존의 놀이터 조성방식에서 탈피하여 사용자 참여형 놀이터 조성사업 추진

○ ‘다연령 다기능 복합놀이공간’ ‘세대통합 놀이공간’으로 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 태백시 소도동 23번지(태백체험공원) 일원

❍ 사 업 량 : 놀이터 조성 1식(어린이공원 8,553㎡)

❍ 사 업 비 : 2,000백만원(도비 700, 시비 1300)

❍ 사업기간 : 2019년~2021년

□ 추진실적

❍ 기적의 놀이터 조성사업 추진계획 : 2018. 11. 7.

❍ 기적의 놀이터 조성사업 추진(변경) 계획 : 2019. 9. 2.

- 조성부지 : 연화산유원지 내 → 태백체험공원 주변

❍ 도시관리계획 결정(변경) 용역 착수 : 2019. 9. 23.

❍ 실시설계용역 착수 : 2020. 2. 24.

❍ 자문단 구성 : 2020. 3. 19.

❍ 추진위원회 개최(2회) : 2020. 5. 28. ~ 2020. 6. 10.

❍ 총괄기획가, 추진위원장 및 위원 위촉 : 2020. 6. 10.

❍ 어린이 디자이너 캠프 개최 : 2020. 7. 5.

❍ 기본구상(안) 드로잉 공유회 개최 : 2020. 8. 1.

❍ 도시관리계획(시설:공원) 결정(변경)승인 고시 : 2020. 8. 12.

❍ 실시설계 어린이 시민 공유회 개최 : 2020. 9. 26.

❍ 실시설계용역 준공 : 2020. 12. 20.

❍ 공사착공 : 2020. 12. 29.

❍ 공사진도(80%)

‧ 지하시설물 우‧오수 및 상수관로 부설 완료

‧ 언덕 형성 등 놀이터 부지 및 조경식재 완료

‧ 놀이기구(스페이스넷, UFO, 암벽등반, 집라인 등) 제작중

□ 추진계획

❍ 놀이시설 현장설치 및 공사마무리 : 2021. 11월한

□ 기대효과

❍ 어린이와 부모들이 함께 여가생활을 즐길 수 있는 공간 조성

❍ 다양한 놀이시설을 배치한 우리시 1호 놀이터조성으로 아이들의

정주의식 함양

까막동네 어깨동무길 조성사업

담당자	이현우	도시개발 담 당	이창근

○ 장기미집행 도시계획도로 개설을 통한 보행자전용도로와 일방차로를 조성하여

쾌적한 도심미관 창출 및 새로운 문화공간 조성

□ 추진계획

❍ 위    치 : 태백시 황지동 215-32번지 일원

❍ 사 업 량 : 도로개설 L=680m, B=10m(보행자전용 7m, 일방차로 3m)

❍ 사 업 비 : 4,000백만원(국비 2,000, 시비 2,000)

❍ 사업기간 : 2019년~2022년

□ 추진실적

❍ 공모사업 신청(지역수요맞춤지원 공모) : 2019. 3. 20.

❍ 공모사업 선정 : 2019. 7. 3.

❍ 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가 고시 : 2019. 8. 1.

❍ 손실보상협의 추진 : 2019. 12. 11.~

※ 토지 23필지(22필지 완료), 지장물 7건(7건 완료)

❍ 지장물 철거공사(지장물 7건) 준공 : 2020. 12. 9.

❍ 공사착공(진도 30%) : 2021. 7. 22.

‧ 옹벽(H=1.0~3.0m) L=150m중 L=100m 시공 완료

□ 기대효과

❍ 장기미집행 도시계획시설 집행으로 주민숙원 민원해소

❍ 안전한 통학로 확보 및 도심 미관 조성을 통한 도로이용자 편익 증대

힐링도시 가족여가 시설 조성사업

담당자	남상수	복구지원 담 당	이정훈

국민적 관광 트렌드인 캠핑시설과 물놀이 시설 등 힐링 가족 여가시설 조성을

통해 태백 ‘힐링의 도시’ 컨셉에 부합되는 새로운 관광명소 창출과 지역경제

활성화 도모

□ 추진계획

❍ 사업기간 : 2020 ~ 2023년

❍ 사업위치 : 태백시 황지동 466-4

❍ 총사업비 : 5,458백만원(도기금 2,000 시기금 1,370 시비 2,088)

- 2020년: 100백만원(도기금 50 / 시기금 50)

- 2021년: 2,088백만원(시비 2,088)

- 향후 확보액: 3,270백만원(도기금 1,950/ 시기금 1,320) - 2021. 정리추경

❍ 총사업량

- 야영시설, 물놀이 체험시설(수공간 조성)

- 부대시설: 전기, 수도, 공동화장실, 공동취사장, 바비큐존 등

□ 추진실적

❍ 도시관리계획(공원) 조성 용역 발주              : ’21. 1. 6.

❍ 손실보상 감정평가                             : ’21. 6. 4.

❍ 토지보상                                      : ’21. 10. 13.

- 토지 11필지(11,091㎡), 지장물(임목 1식)

□ 추진계획

❍ 기본 및 실시설계 용역                        : ‘22. 1월 ~5월

❍ 공사착공                                     : ‘22. 6월중

❍ 공사준공                                     : ‘23. 6월중

ECO JOB CITY 태백 도시재생 뉴딜사업

에코잡시티촉신담당	최만식	담당자	김성희, 장진영, 강석민

○ 일자리 창출을 통한 도시경쟁력 강화

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019~2024년(6개년)

❍ 위    치 : 태백시 장성동 226-6번지 일원

❍ 사 업 비 : 215,300백만원

(국 25,000, 도 5,004, 시11,696 공기업 57,800 민간 101,000, 부처협업 3,980, 자체지방비 10,820)

□ 추진실적

❍ 도시재생 프로그램 운영 및 주민공모사업 추진: 2021. 2 ~

❍ ECO JOB CITY 태백 부지 조성공사 추진: 2021. 4 ~

❍ 스마트팜‧식물공장 및 가공시설 기본설계 및 실시설계: 2021. 6 ~

❍ 에코잡통합문화플랫폼 기본 및 실시설계 추진: 2021. 10 ~

□ 향후 추진계획

❍ 친환경산림재생에너지타운 조성 부지조성공사 착공: 2021. 11. ~

❍ 스마트팜‧식물공장 및 가공시설 부지조성 공사 준공: 2021. 11. ~

❍ 도시재생 프로그램 운영 및 주민공모사업 추진: 2022. 1 ~

❍ 스마트팜‧식물공장 및 가공시설 착공: 2022. 3. ~

- 준공: 2022. 9 ~

❍ 에코잡통합문화플랫폼 착공: 2022. 4. ~

- 준공: 2022. 12.

장성 탄탄마을 도시재생 뉴딜사업

재생사업 담당	함순식	담당자	지호선,홍성용

❍ 장성지역 주거지지원형 도시재생 뉴딜사업으로 생활환경 인프라 개선

□ 사업개요

❍ 위    치 : 강원도 태백시 장성동 159-1번지

❍ 사 업 량 : A= 95,739㎡

❍ 사 업 비 : 65,100백만원

(국비 13,000/지방비 8,700/자체사업비 3,500/부처연계 9,500/공기업 30,400)

❍ 사업기간 : 2018년 ∼ 2023년

□ 추진실적

❍ 생활편의시설 확충사업 실시설계용역 착수: ’21. 1. 21.

❍ 탄탄나눔센터 급수시설 공사 착수: ’21. 2. 1.

❍ 화광아파트 철거공사 폐기물처리용역 완료: ’21. 2. 9.

❍ 화광아파트 철거공사 완료: ’21. 2. 15.

❍ 쌈지정원 조성사업 실시설계용역 착수: ’21. 2. 24.

❍ 장애물없는 생활환경조성 1차 공사 재착공: ’21. 4. 6.

❍ 안심담장, 안심쉼터 조성 공사 재착공: ’21. 4. 6.

❍ 화신촌 마을 나무심기 행사 개최 : ’21. 4. 17.

❍ 수제맥주 제조교육 대행 용역 착수: ’21. 5. 7.

❍ 국민임대아파트 및 생활SOC복합화 실시설계 완료: ’21. 5. 18.

❍ 생활편의시설 확충사업 석면해체공사 착공: ’21. 7. 7.

❍ 2022년도 전선지중화 사업 공모 신청: ’21. 7. 22.

❍ 탄탄나눔센터 증축공사(2차) 착공: ’21. 7. 29.

❍ 마을관리협동조합 설립교육 용역 착수: ’21. 8. 3.

❍ 수제맥주 제조교육 대행 용역 준공: ’21. 8. 4.

❍ 쌈지정원 조성공사 착공: ’21. 8. 6.

❍ 생활SOC복합화 수지분석 용역 착수: ’21. 8. 25.

❍ 장애물없는 생활환경조성 2차 공사 착공: ’21. 9. 1.

❍ 생활편의시설 확충사업 철거공사 착공: ’21. 9. 23.

❍ 생활편의시설 확충사업 석면해체공사 준공: ’21. 10. 5.

❍ 활성화계획 변경(중요한 변경) 승인 고시: ’21. 10. 7.

❍ 장성 탄탄마을 화재감지시설 설치공사 착수: ‘21. 10. 13.

❍ 마을관리협동조합 전문 컨설팅 용역 착수: ’21. 10. 22.

❍ 장성 탄탄마을 축제 개최: ’21. 10. 30.

□ 향후 추진계획

❍ 국민임대아파트 및 생활SOC복합화 착공: ‘21. 11.

❍ 탄탄나눔센터 증축 공사(2차) 준공: ’21. 12.

❍ 생활편의시설 확충사업 준공: ‘21. 12.

❍ 생활SOC복합화 준공: ’22. 10.

❍ 국민임대아파트 준공: ‘23. 11.

□ 주요 사항

❍ 생활SOC복합화 건립 사업비 증액 사항: 55.08억 원

* 도시재생과, 스포츠레저과, 보건소 부처연계 사업

황지천 생태하천 복원사업

유역관리담당	최성민	담당자	구호영

○ 도심 복개하천 복원을 통한 수질개선 및 수생태계 건강성 회복

○ 발원지 물길복원을 통한 관광자원화 구축으로 지역경제 활성화

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2010. 10. ~ 2021. 11.

❍ 위    치: 황지연못~태백우체국~서울공업사~황지천

❍ 사 업 비: 37,000백만원(국비 22,200, 도비 4,440, 기금 4,440, 시비 5,920)

※ 2021 사업비: 3,609백만원(계속비 이월)

❍ 사업내용: 물길복원 L=840m(근린공원 116m, 수변공원 724m), B=5~20m

□ 추진실적

❍ 공사 및 건설사업관리용역 착수: 2017. 3. 3.

❍ 보상: 토지 102필지, 건물 34동 보상 완료

❍ 물길복원 공사 완료

- 1구간(근린공원구간): 공사 완료(116m)

- 2구간(수변공원구간): 공사 완료(724m)

❍ 황지천 생태하천 복원사업 준공: 2021. 8. 31.

□ 향후추진 계획

❍ 황지천 생태하천 복원공사 GIS DB 구축용역 실시: 2021. 11. 30. 까지

→ 건축지적과: 지하시설물 정보 통합시스템 등재

❍ 공사 준공 후 향후 5년간 사후모니터링 실시예정: 2022. 1월

- 수리수문조사, 수질분석, 생물다양성, 수생태계 건강성 등 모니터링

- 조사용역비: 30백만원/년

폐광지역 걷는 길(운탄고도) 조성

산림관리담당	김홍일	담당자	김홍일

○ 폐광지역 지형의 장점을 살려 고원 장거리 트레일길 조성

○ 폐광지역 장소 콘텐츠(점:點)를 하나의 선(線)으로 연결 관광객유치 및 지역     경제 활성화, 일자리 창출 효과기대

□ 사업개요

❍ 사 업 명: 폐광지역 걷는 길(운탄고도) 조성 사업

❍ 사업위치: 영월~정선~태백~삼척(173km, 8박9일 코스)

❍ 총사업비: 3,600백만원(폐기금 도공통분)

구 분	전 체	태백시	영월군	정선군	삼척시
거 리	173km	24.4km	77.3km	19.9km	51.4km
사업비	2,500	995	1,397	108	‘22년 사업

□ 추진실적

❍ 기본 및 실시설계용역 추진(강원도 일괄): 2021. 2. ~ 2021. 6.

❍ 브랜드 디자인 개발 용역(강원도): 2021. 5. ~ 2021. 7.

→ 브랜드 네임 확정“운탄고도1330”

❍ 국유림 사용 협의: 2021. 7. ~ 2021. 8.

❍ 공사착공: 2021. 9. 1.  공사준공(예정): 2021. 12. 29.

↳ 시 공: 삼척동해태백산림조합 / 693백만원

감 리: 아름드리ENG(영월) / 15백만원

□ 향후 추진계획

❍ 태백·정선 구간 준공 -------------------------------- 2021. 12월

❍ 걷는 길 안내센터 운영(4개시·군)----------------------- 2022. 1월

❍ 삼척·영월구간 준공 ---------------------------------- 2022. 6월

❍ 개통식·걷기행사 ------------------------------------ 2022. 10월