109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

태백시에서 ‘22년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후
꿈꾸는 예술터 ‘탄광사택 누리큐브’ 조성사업	2,000	-	-	297	1,703	2024	2021	20
전지훈련 특화시설(에어돔) 설치사업	12,500		-	-	12,500	2024	2022	5
태백 休(휴) 전지훈련센터 조성	12,500		-	-	12,500	2026	2022	5
흙다리골 도로개설공사	4,600	150	-	-	4,450	2027	2022	10
세곡길 도로개설공사	250	50	-	-	200	2024	2022	10
태백시 첫생명맞이& 아이키움센터 건립	5,200	-	-	-	5,200	2024	2022	40
통합공공임대 주택 건립사업	18,800		-	-	18,800	2026	2022	5
태백공원묘원 추모관 신축	9,014	504	-	-	8,510	2025	2022	5
고랭지 스마트팜 조성	5,900	0	-	875	4,275	2026	2022	5
태백 시민체육관 조성사업	12,500		-	-	12,500	2025	2022	5

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후
1,2학년 대학축구 연맹전	1,002			322	680	연례 반복	2022	100
문체부장관기 전국 중고 남녀태권도대회	669			298	371	연례 반복	2022	100
대한당구연맹회배 전국 당구대회	180	0	180	0	0	-	2022	100
태백시장기 리틀야구대회	287			98	189	연례 반복	2021	100
태권도 전국 종별 선수권대회	793			242	551	연례 반복	2021	100
대한태권도협회장배 전국 태권도 품새 선수권대회	669			140	529	연례 반복	2021	100
한국중고태권도연맹회장기 전국 태권도대회 및 전국 품새대회	298			298	-	연례 반복	2021	100

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

꿈꾸는 예술터 ‘탄광사택 누리큐브’ 조성사업

담당자

문화관광과 이미경(☎550-2982)

□ 사업목적 및 필요성

○ 학교 교과과정 및 체험프로그램과 연계한 창의 문화예술교육을 위한 문화누리 공간조성

○ 문화예술교육 인적자원(예술인, 문화활동가) 연계 핵심 거점 공간조성

□ 사업개요

○ 기    간 : 2021.~2024.

○ 위    치 : 태백시 태백산로 4833, 탄광사택촌

○ 총사업비 : 2,500백만 원

○ 사업규모 : 문화예술교육 전용시설 조성 1식(A=1,156㎡)

□ 재원현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,500	-	297	1,129	1,074
국 비	1,000	-	148.5	825	26.5
특 조	250	-	-	62	188
시군구비	1,250	-	148.5	242	859.5

※ 사업계획 변경(리모델링→증축)으로 추가사업비 확보: 500백만 원(특조 250, 시비 250)

※ 당초 사업기간이 2021~2023년으로 국비 잔액(26.5백만 원) 반납 예정

□ 추진현황

○ 기본 및 실시설계 용역, 공간조성방안 연구 용역: 2022. 9.~2022. 11.

○ 탄광사택 누리큐브 시설 시범 프로그램 운영: 2022. 11.~2023. 12.

□ 향후계획

○ 탄광사택 누리큐브 조성공사 추진: 2023. 1. 4.~2024. 2. 5.

○ 탄광사택 누리큐브 공사 준공: 2024. 6.

○ 탄광사택 누리큐브 개관 및 운영: 2024. 하반기

사업명

태백 사계절 다목적 전지훈련센터 조성사업

담당자

스포츠레저과 이재광(☎550-3970)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동계 전지훈련이 가능한 사계절 다목적 에어돔 구장 조성을 통한 전지훈련단 방문 활성화 및 체육시설 인프라 확충을 통해 각종 스포츠 대회 개최, 전지훈련 유치 등 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기    간 : 2023. 7.~2024. 12.

○ 위    치 : 문곡동 13-16번지 일원(고원 4구장)

○ 총사업비 : 12,500백만 원(도 6,500/ 시 6,000)

○ 사업규모 : 에어돔(10,400㎡), 지원시설(950㎡) 등 조성

□ 재원현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	12,500			2,500	10,000
도 비	6,500			1,625	4,875
시군구비	6,000			875	5,125

□ 추진현황

○ 기본구상 용역: 2022. 7. ~ 12.

○ 중기지방재정계획 반영 및 재정투자심사 승인: 2022. 11.

○ 2023~27 중기지방재정계획 반영: 2022. 12.

□ 향후계획

○ 건축기획 용역: 2023. 8. ~ 2023. 11.

○ 설계공모 및 실시설계 용역: 2023. 11. ~ 2024. 6.

○ 공사 착공 및 준공: 2024. 7. ~ 2024. 12.

사업명

태백 休(휴) 전지훈련센터 조성

담당자

스포츠레저과 이재광(☎550-3970)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동계 전지훈련 인프라 구축을 위한 태백 休(휴) 전지훈련 센터를 조성하여 스포츠산업 및 지역경제 활성화 연계

□ 사업개요

○ 기    간 : 2023. 7.~2026. 3.

○ 위    치 : 소도동 10-126번지 일원[(구) 함태초등학교]

○ 총사업비 : 12,500백만 원(국비 8,700, 시비 3,800)

○ 사업규모 : 전지훈련센터 조성(2,382㎡), 주차장(16대)

· 1층(1,184㎡): 웨이트 트레이닝센터, 체력측정실, 스크린 야구·골프, 샤워실, 세미나실, 관리사무실, 라운지 등

· 2층(939㎡): 숙박동(14실), 영상분석실, 공용공간(세탁실) 등

· 3층(161㎡): 옥상정원 등 휴게공간

· 지하1층(98㎡): 기계실

□ 재원현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	12,500			500	12,000
국 비	8,700				8,700
시군구비	3,800			500	3,300

□ 추진현황

○ 기본구상 용역: 2022. 7. ~ 12.

○ 중기지방재정계획 반영 및 재정투자심사 승인: 2022. 10.~2022. 11.

○ 공유재산관리계획 시의회 승인: 2022. 12.

□ 향후계획

○ 건축기획 용역: 2023. 9. ~ 2024. 1.

○ 실시설계 용역 및 건축신고 협의: 2024. 2. ~ 8.

○ 공사 착공 및 준공: 2024. 9. ~ 2026. 3.

사업명

흙다리골 도로개설공사

담당자

건설과 김정희(☎550-2973)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로개설공사를 통하여 주민불편 사항을 해소하고 주민의 편익을 제공하는데 목적이 있음

□ 사업개요

○ 기    간 : 2021. 1.~2027. 12.

○ 위    치 : 황지동 630번지 일원

○ 총사업비 : 4,600백만 원

○ 사업규모 : 도로개설 L=1,300m(B=10m)

□ 재원현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,600	-	50	100	4,450
국 비
시군구비	4,600	-	50	100	4,450

□ 추진현황

○ 흙다리골 노선선정용역: 2022.6.24. ~ 2022.12.28.

□ 향후계획

○ 흙다리골 도시관리계획 결정 및 실시설계용역 추진 중: 2023.2.28. ~ 2024.2.27.

○ 도시계획위원회 심의 완료: 2023.10.19.

○ 행정절차 이행 및 보상협의: 2024. 2. ~ 2025. 12.

○ 공사 착공 및 준공: 2025. 1. ~ 2027. 3.

사업명

세곡길 도로개설공사

담당자

건설과 김정희(☎550-2973)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로개설공사를 통하여 주민불편 사항을 해소하고 주민의 편익을 제공하는데 목적이 있음

□ 사업개요

○ 기    간 : 2022. 1.~2024. 12.

○ 위    치 : 화전동 산36-9번지 일원

○ 총사업비 : 200백만 원

※ 총사업비 변경에 따른 사업비 조정(2,000백만 원→200백만 원)

○ 사업규모 : 도로개설 L=422m(B=4m)

□ 재원현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	250	-	50		200
국 비
시군구비	250	-	50		200

□ 추진현황

○ 세곡길 도로개설공사 실시설계용역: 2022.9.28. ~ 2023.6.21.

□ 향후계획

○ 산지전용협의 완료: 2023.6.15.

○ 공사 착공 및 준공: 2024. 3. ~ 2024. 12.

사업명

태백시 첫생명맞이&아이키움센터 건립

담당자

건강과 김창호(☎550-2194)

□ 사업목적 및 필요성

○ 관내 산후돌봄서비스 제공기관이 전무함에 따라 센터 건립으로 안전하고 편리한 산후돌봄서비스를 제공하여 출산의 공공성 확보 및 산후 건강관리로 출산 친화적인 환경조성

□ 사업개요

○ 기    간: 2022. 8.~2024. 12.

○ 위    치: 태백시 황지동 428-2, 428-18

○ 총사업비: 5,890백만 원

○ 사업규모: 첫생명맞이&아이키움센터 신축 1개동

[ 모자동실 10실, 영유아실 등 연면적 976.94㎡, 지상3층(3층: 옥상층)]

□ 재원현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,890	0	3,000	2,063	827
기 금	4,000	0	2,400	1,600
시군구비	1,890	0	600	463	827

□ 추진현황

○ 기본계획 수립 및 소멸기금 확보: 2022. 6 ~ 12.

□ 향후계획

○ 건축기획용역 및 공공건축심의위원회 심의: 2023. 4.~6.

○ 건축설계공모 공모 및 심사: 2023. 7~9.

○ 부지 연접 국유지 매입으로 부지 추가확보: 2023. 9.

○ 기본 및 실시설계 용역 및 건축인·허가 협의: 2023. 9.~12.

○ 각종 인증의뢰 및 건축, 토목공사 입찰 및 계약: 2023. 12.

○ 건축인·허가: 2024. 1.

○ 기계, 소방공사 등 공종별 입찰 및 계약: 2024. 2.

○ 시공단계 건설사업관리 등 감독권한대행 계약: 2024. 1~3.

○ 공사 착공 및 준공: 2024. 1. ~ 2024. 12.

사업명

통합공공임대주택 건립사업

담당자

건축지적과 신웅기(☎550-2627)

□ 사업목적 및 필요성

○ 젊은 층(사회초년생, 대학생, 신혼부부 등) 유입 및 정착으로 주거안전 도모와 장기거주 여겅 조성으로 인구 유출 방지

□ 사업개요

○ 기    간 : 2022. 1. ~ 2026. 12.

○ 위    치 : 황지동 432번지 일원

○ 총사업비 : 18,800백만 원

○ 사업규모 : 통합공공임대주택 100호

□ 재원현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	18,800			1,561	17,239
국 비	6,211				6,211
도 비	3,600			285	3,315
시 비	8,989			1,276	7,713

□ 추진현황

○ 통합공공임대주택 후보지 선정(국토교통부): 2022. 6. 21.

○ 중기지방재정계획 반영 및 재정투자심사(조건부) 승인: 2022. 8. 9.

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계용역 추진중: 2023.7. ~ 현재

○ 조건부 이행에 따른 재정투자심사(중앙): 2024. 2. ~ 2023. 6.

○ 공동주택 사업계획 승인(강원도): 2024. 6.

○ 공사 착공, 준공 및 입주: 2024. 12. ~ 2026. 12.

사업명

태백공원묘원 추모관 신축

담당자

사회복지과 권순철(☎550-3934)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2002년도에 신축한 태백공원묘원 추모관 노후 및 공간부족에 따른 시설 확충 필요, 경쟁력 있는 장사시설 운영 및 장례서비스 질 향상을 도모하고자 함

□ 사업개요

○ 기    간 : 2023. ~2025.

○ 위    치 : 태백시 백두대간로 844(태백공원묘원 부지내)

○ 총사업비 : 9,014백만 원

○ 사업규모 : 추모관신축 1식(연먼적 3,000㎡ / 20,000기)

□ 재원현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	9,014		504	82	8,428
국 비	4,987		41	-	4,946
시군구비	4,027		463	82	3,482

□ 추진현황

○ 중기지방재정계획 반영 및 재정투자심사 승인: 2022. 3.

□ 향후계획

○ 공공건축심의위원회 심의 완료: 2023. 6.

○ 건축기획용역 완료: 2023. 12.

○ 설계공모 및 계약심사: 2024. 2. ~ 2023. 3.

○ 기본 및 실시설계: 2024. 3. ~ 6.

○ 공사 착공 및 준공: 2024. 7. ~ 2025. 12.

사업명

고랭지 스마트팜 조성

담당자

농업과  박창식(☎550-2709)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고랭지채소 대체작목 육성 및 드론 활용 정밀농업 실증

- 고랭지채소 대체작목 육성을 위한 생산 및 유통기반 조성

- DNA+드론 기술 적용 및 실증으로 정밀농업 실현

- 드론 조종사 양성 및 방제단 운영으로 청년 일자리 창출

□ 사업개요

○ 기    간 : 2022. 8. ~ 2026. 12.

○ 위    치 : 삼척시 하장면 일원, 태백시 삼수동 일원

○ 총사업비 : 5,900백만 원(광역기금-도비 4,700, 시비 500, 기타 700)

○ 사업규모 :

- 산지유통센터(A=1,100㎡) 조성(2개소/태백,삼척) 4,540백만원(태백2,330/삼척2,210)

- 생산단지(육묘장,330㎡×2동) 조성(2개소,태백,삼척): 320백만원(태백100/삼척220)

- DNA+드론 정밀농업 실증 용역(삼척시 추진): 1,040백만원(태백68/삼척972)

□ 재원현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,900		875	1,275	3,750
기금(도비)	4,700		700	1,000	3,000
시군구비	500		75	125	300
기타	700		100	150	450

□ 추진현황

○ 태백시 투자심사 완료(`22. 11월)

□ 향후계획

○ 태백시 공유재산심의회, 부지확보(`23. 2월)

○ 삼척시-태백시 실무 협의(`23. 3월)

○ 실시설계 용역 및 건축신고 협의, 착공 : 2023. 5. ~ 12.

○ 산지 유통센터  재착공 및 준공: 2024. 2. ~ 2024. 9.

○ 육묘장 조성: 2024. 3. ~ 2024. 10.

○ DAN+드론 정밀농업 실증: 2024. 1. ~ 2026. 12.

○ 드론 구입 및 방제, 조정사양성, 농산물 생산. 출하: 2024. 1. ~ 2026. 12.

사업명

태백 사계절 다목적 전지훈련센터 조성사업

담당자

스포츠레저과 이재광(☎550-3970)

□ 사업목적 및 필요성

○ 태백시민체육관 조성사업을 통해 시간과 장소에 구애받지 않고 언제 어디서든 전 시민 생활체육이 가능한 스포츠 인프라 구축을 통해 생활인구를 유치하고, 고원체육관과 연게하여 전국 및 도 단위 대규모 대회와 전지훈련단 유치 확대로 연 24,000여명의 스포츠 방문객을 유도하고자 함

□ 사업개요

○ 기    간 : 2022. 10.~2025. 12.

○ 위    치 : 문곡동 1 일원(고원체육관 후면)

○ 총사업비 : 12,500백만 원

○ 사업규모 : 지상 2층 규모의 다목적 경기장 및 배드민턴 경기장 건립

□ 재원현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	12,500
시군구비	12,500		4,500	8,000

□ 추진현황

○ 태백시 지방소멸대응기금(기초계정) 투자계획 수립: 2022. 5. 19.

○ 지방소멸대응기금 배분액 확정에 따른 사업 조정 투자계획: 2022. 8. 26.

○ 강원도 투자심사(‘22 제2차수시) 및 공유재산심의회 완료: 2022. 9.

□ 향후계획

○ 시민체육관(고원3체육관) 건립 기본계획 수립: 2023. 1. 26

○ 도시관리계획(시설:유원지) 변경 고시: 2023. 2. 24.

○ 시민체육관(고원3체육관) 건축기획용역 추진: 2023. 2. 27. ~ 6. 24.

○ 시민체육관(고원3체육관) 실시설계용역 추진: 2023. 8. 9 ~

○ 소규모 재해 및 환경영향평가 용역추진: 2023. 10 ~

○ 강원도 계약심사, 입찰공고 및 계약: 2024. 5월 한

○ 공사 추진: 2024. 6. ~ 2025. 12.

사업명

1,2학년 대학축구연맹전

담당자

스포츠과 홍은주(☎550-2493)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국 단위 체육대회를 통한 지역경제 활성화 및 지역홍보

○ 엘리트 체육 육성 및 활성화 도모를 통한 고지대 스포츠 도시 입지구축

○ 폐광지역의 인구감소와 경제침체를 극복할 수 있는 매개체 필요

○ 스포츠대회를 통한 선수단 유입으로 지역경제 활성화 기대

□ 사업개요

○ 기    간 : 7월중 16일간(연례반복)

○ 위    치 : 연화산길 10, 태백종합경기장 외 7개 구장

○ 총사업비 : 1,002백만 원

○ 사업규모 : 60개팀 2,000여명 참가

□ 재원현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	1,002		322	321	359
시군구비	1,002		322	321	359

□ 추진현황

○ 2022. 7. 4. ~ 7. 18. / 15일간 / 59개팀 3,000여명 참가 / 111경기

□ 향후계획

○ 2023. 7. 2. ~ 7. 17. / 16일간 / 65개팀 6,000여명 참가 예정

○ 대학축구연맹전 유치 확정: 2024. 3.

○ 구장 점검 및 대회 준비: 2024. 4. ~ 6.

○ 대회 개최: 2024. 7.

사업명

문체부장관기 전국 중고 남녀

태권도대회

담당자

스포츠과 홍은주(☎550-2493)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국 단위 체육대회를 통한 지역경제 활성화 및 지역홍보

○ 엘리트 체육 육성 및 활성화 도모를 통한 고지대 스포츠 도시 입지구축

○ 폐광지역의 인구감소와 경제침체를 극복할 수 있는 매개체 필요

○ 스포츠대회를 통한 선수단 유입으로 지역경제 활성화 기대

□ 사업개요

○ 기    간 : 7월중 13일간(연례반복)

○ 위    치 : 태백로 1485, 고원체육관

○ 총사업비 : 669백만 원

○ 사업규모 : 전국 남녀 중고 태권도선수 3,500여명 참가

□ 재원현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	669		298	371
시군구비	669		298	371

□ 추진현황

○ 2022. 7. 26. ~ 8. 7. / 13일간 / 3,500여명 참가

□ 향후계획

○ 2023. 7. 25. ~ 8. 6. / 13일간 / 3,500여명 참가 예정

○ 2024년 이후 미개최

사업명

대한당구연맹회장배 전국 당구대회

담당자

스포츠과 장승희(☎550-2589)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국 단위 당구대회 개최를 통한 지역경제 활성화  및 지역홍보

○ 생활체육 육성 및 활성화 도모를 통한 고지대 스포츠 도시 입지구축

□ 사업개요

○ 기    간 : 2022. 9. 5.~2022. 9. 30.(대회: 9.14.~9.18. / 5일간)

○ 위    치 : 고원체육관 및 장성체육관

○ 총사업비 : 180백만 원

○ 사업규모 : 전국 프로 당구선수 및 동호인 1,500여명

□ 재원현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	180	-	180	-	-
시군구비	180	-	180	-	-

□ 추진현황

○ 대회개최: 2022. 9. 14.~9. 18. / 5일간

□ 향후계획

○ 추후 대회 미개최

사업명

태백시장기 전국 리틀야구대회

담당자

스포츠과 홍은주(☎550-2493)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국 단위 체육대회를 통한 지역경제 활성화 및 지역홍보

○ 엘리트 체육 육성 및 활성화 도모를 통한 고지대 스포츠 도시 입지구축

○ 폐광지역의 인구감소와 경제침체를 극복할 수 있는 매개체 필요

○ 스포츠대회를 통한 선수단 유입으로 지역경제 활성화 기대

□ 사업개요

○ 기    간 : 5월중 10일간(연례반복)

○ 위    치 : 백두대간로 179, 태백스포츠파크

○ 총사업비 : 287백만 원

○ 사업규모 : 2,000여명 참가

□ 재원현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	287		98	97	92
시군구비	287		98	97	92

□ 추진현황

○ 2022. 5. 20. ~ 5. 30. / 11일간 / 1,500여명 참가

□ 향후계획

○ 2023. 5. 18. ~ 5. 27. / 10일간 / 900여명 참가 예정

○ 구장 점검 및 대회 준비: 2024. 3. ~ 4.

○ 대회 개최: 2024. 5.

사업명

태권도 전국 종별 선수권대회

담당자

스포츠과 홍은주(☎550-2493)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국 단위 체육대회를 통한 지역경제 활성화 및 지역홍보

○ 엘리트 체육 육성 및 활성화 도모를 통한 고지대 스포츠 도시 입지구축

○ 폐광지역의 인구감소와 경제침체를 극복할 수 있는 매개체 필요

○ 스포츠대회를 통한 선수단 유입으로 지역경제 활성화 기대

□ 사업개요

○ 기    간 : 3월중 8일간(연례반복)

○ 위    치 : 태백로 1485, 고원체육관

○ 총사업비 : 793백만 원

○ 사업규모 : 2,000여명 참가

□ 재원현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	793		242	268	283
시군구비	793		242	268	283

□ 추진현황

○ 2022. 3. 15. ~ 3. 21. / 7일간 / 1,600여명 참가

□ 향후계획

○ 2023. 4. 1. ~ 4. 9. / 9일간 / 2,000여명 참가 예정

○ 구장 점검 및 대회 준비: 2024. 2. ~ 3.

○ 대회 개최: 2024. 4.

사업명

대한태권도협회장배 전국 태권도 품새 선수권대회

담당자

스포츠과 홍은주(☎550-2493)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국 단위 체육대회를 통한 지역경제 활성화 및 지역홍보

○ 엘리트 체육 육성 및 활성화 도모를 통한 고지대 스포츠 도시 입지구축

○ 폐광지역의 인구감소와 경제침체를 극복할 수 있는 매개체 필요

○ 스포츠대회를 통한 선수단 유입으로 지역경제 활성화 기대

□ 사업개요

○ 기    간 : 2월중 5일간(연례반복)

○ 위    치 : 태백로 1485, 고원체육관

○ 총사업비 : 669백만 원

○ 사업규모 : 2,000여명 참가

□ 재원현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	669		140	371	335
시군구비	669		140	371	335

□ 추진현황

○ 2022. 2. 8. ~ 2. 11. / 4일간 / 1,800여명 참가

□ 향후계획

○ 2023. 11. 27. ~ 11. 30. / 4일간 / 1,900여명 참가 예정

○ 강원도 지방재정투자심사 사업 제출: 2023. 12.

○ 2024년 제1회 추가경정예산 신청: 2024. 2.

○ 2024년 대회 개최: 2024. 11.

사업명

한국중고태권도연맹회장기 전국 태권도대회 및 전국 품새대회

담당자

스포츠과 홍은주(☎550-2493)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국 단위 체육대회를 통한 지역경제 활성화 및 지역홍보

○ 엘리트 체육 육성 및 활성화 도모를 통한 고지대 스포츠 도시 입지구축

○ 폐광지역의 인구감소와 경제침체를 극복할 수 있는 매개체 필요

○ 스포츠대회를 통한 선수단 유입으로 지역경제 활성화 기대

□ 사업개요

○ 기    간 : 4월중 11일간(연례반복)

○ 위    치 : 태백로 1485, 고원체육관

○ 총사업비 : 298백만 원

○ 사업규모 : 2,000여명 참가

□ 재원현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	298		298	-	-
시군구비	298		298	-	-

□ 추진현황

○ 2022. 4. 25. ~ 5. 5. / 11일간 / 2,800여명 참가

□ 향후계획

○ 2023년 이후 미개최

10-2. 지방채 발행사업

우리 태백시에서 ‘22년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 태백시에서 ‘22년에 추진한 민간투자사업 현황은 없습니다.