삼수령터널 진입도로 복구

도로시설담당	김세연	담당자	신효선

○ 도로 침하 구간의 복구로 시민의 생명과 재산 보호

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2022. 12. ~ 2024. 7.

❍ 총사업비: 4,950백만 원(국비 2,500, 시비 2,500)

❍ 사업내용: 도로 침하 복구(교량) L=70m, B=12.5m

□ 추진실적

❍ 도로침하 발생: 2020. 8. 12.

❍ 도로보수공사 실시(한신공영): 2020. 9. 22. ~ 10. 31.

❍ 도로침하 발생(2차): 2021. 8. 27.

❍ 도로응급복구공사 실시(태백시): 2021. 12. 14. ~ 12. 23.

❍ 지반침하 원인조사 및 보강대책수립용역 완료: 2021. 12. 10.

❍ 기관방문 협의(9회): 국회, 행정안전부, 국토부, 원주지방국토관리청, 강원도

❍ 배수구조물 정비공사 실시(태백시): 2022. 6. 13 ~ 7.. 25.

❍ 실시설계비 2억 원 확보(예비비): 2022. 10. 13.

❍ 행정안전부 재난안전특별교부서 25억 원 확보: 2022. 12. 21.

□ 향후 추진계획

❍ 실시설계용역 발주	2023. 5.

❍ 공사 착공	2023. 11.

웰니스 항노화산업 특화단지 조성사업 추진

공영개발팀장	김정태	담당자	김태용

○ 노화예방·치매치료 등 천연자원을 활용한 항노화 특화단지 조성으로 천연치유물 제조산업 입주 유치를 통한 6차 산업형 항노화 도시 기반 마련

□ 사업개요

❍ 위    치: 태백시 문곡동 산23-2번지 일원

❍ 사 업 비: 86,944백만 원

❍ 사업면적: 429,105㎡

❍ 사업내용

- 관광휴양시설: 힐링빌리지, 스포츠 빌리지, 캠핑장, 숲체험시설 등

- 공업용지: 항노화공방, R&D센터, 스마트팜

- 녹지용지: 소공원, 조성녹지 등

□ 추진실적

❍ 강원도 발전촉진형․거점육성형 지역개발계획 고시: 2018. 1. 5.

❍ 지역개발사업구역 등의 일괄 지정․승인 신청: 2022. 12. 9.

□ 추진계획

❍ 무연분묘 1차 개장 공고(45일간)	: 2023. 2. 14.~3. 30.

❍ 2023년 제2차 강원도 경관위원회 개최결과 알림(조건부가결): 2023. 3. 22.

❍ 공유재산관리계획 변경(안) 의결: 2023. 5. 4.

❍ 재해영향평가위원회 심의위원회 결과 알림(조건부 의결): 2023. 6. 15.

❍ 지역개발사업 재해영향평가 등 협의 승인 통보(심의완료): 2023. 7. 13.

❍ 환경영향평가 협의 의견(심의완료): 2023. 7. 21.

❍ 중앙토지수용위원회 사업인정(의제)사업 협의완료(조건부 동의)	: 2023. 9. 8.

❍ 지역개발조정위원회 심의완료: 2023. 10. 26.

❍ 2023년 제12회 강원특별자치도 건설기술심의위원회 완료: 2023. 11. 7.

❍ 지역개발구역 등의 일괄 지정․승인 고시(최종): 2023. 11. 10.

❍ 웰니스 항노화산업 특화단지 진입도로 철거공사 착공: 2023. 12. 8.

❍ 공사발주(조달청): 2023. 12. 15.

❍ 보상계획 공고완료: 2023. 12. 19.

❍ 재해영향평가 및 환경영향평가 착공 및 관리책임자 통보: 23. 12. 20.

❍ 보상계획 공고 결과 보고: 23. 12. 20.

❍ 보상협의회 구성 운영계획: 23. 12. 21.

- 당초: 신성장전략과장 → 변경: 정책사업과장

❍ 비점오염원 설치신고서 제출(원주지방환경청): 23. 12. 28.

❍ 강원랜드 시니어헬스케어센터 원형지 공급 계약 체결: 2023. 1. 11.

❍ 공사 착공: 2024. 3월

□ 기대효과

❍ 대한민국 명품 웰니스 항노화 도시 조성으로 지역 이미지 개선

❍ 1차 산업의 고부가가치 6차 산업으로의 변화로 다양한 산업구조 개편

❍ 천연물과 치유, 문화가 융합한 고품격 웰니스 항노화 도시 조성

❍ 아고산대 청정자원을 활용한 새로운 지역 일자리 및 소득원 창출

황지동 도시재생사업

도시정책담당	최만식	담당자	전삼택, 문효기

○ 도시재생사업으로 중심상권 활성화 및 황지동 도시공간 재창조

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2022년 ~ 2025년(4개년)

❍ 위    치: 황지동 47번지 일원(황지동 행정복지센터 일원)

❍ 총사업비: 16,700백만원(국 10,000 도 1,000 시 5,700)

❍ 사업내용: 3개 단위사업, 6개 세부사업

- 일상의 이음(황지이음터, 현장지원센터 운영)

- 문화의 이음(황지 공유문화주방, 빛나는 황지로)

- 시간의 이음(황지동 집수리, 황지 안심생활가로)

□ 추진실적

❍ 황지이음터 ‧ 공유 문화주방 조성

- 사업대상지 매입(7필지, 1,230㎡) 및 태백시공공건축심의위원회 심의: 원안가결 / 2022. 8.

- 황지이음터 부지 지반조사 및 경계복원 측량: 2022. 9.

❍ 공기관 대행 위 ‧ 수탁 계약체결: 한국광해광업공단, 5개 사업 / 16,540백만원

□ 향후 추진계획

❍ 황지이음터 ‧ 공유 문화주방 조성: 연면적 4,250㎡(4층) ‧ 250㎡(2층)

- 실시 설계: 2023. 3. ~ 2023. 12.(10개월) / 공사: 2024. 1. ~ 2025. 6.(18개월)

※ 황지동행정복지센터 이전 및 철거

‧ 철거공사: 2023. 9. ~ 2023. 12.

‧ 후보지: 석탄회관 / 이주시점: 2023. 8월 예정 / 임차기간: 2023. 8. ~ 2025. 8. / 임차규모: 1층, 2층  * 황지동행정복지센터, 태백남성의용소방대, 황지동대 수용가능

❍ 식문화 프로그램: 레시피 개발 등 상가별 맞춤형 컨설팅 지원 및 음식 나눔 행사

❍ 황지동 집수리: 가이드라인 수립 및 추진단 양성(18명), 노후주택 집수리(15가구)

❍ 황지 안심생활가로: 상생골목 디자인단 양성(20명), 골목길 정비 및 정원 조성

장성 탄탄마을 도시재생 뉴딜사업

재생사업 담당	김규한	담당자	김성진

❍ 장성지역 주거지지원형 도시재생 뉴딜사업으로 생활환경 인프라 개선

□ 사업개요

❍ 위    치 : 강원도 태백시 장성동 159-1번지

❍ 사 업 량 : A= 95,739㎡

❍ 사 업 비 : 65,100백만원

- 국비 13,000 / 지방비 8,700 / 자체사업비 3,500 / 부처연계 9,500 / 공기업 30,400

❍ 사업기간 : 2018년 ∼ 2023년

□ 추진실적

❍ 장성 탄탄마을 생활편의시설(장애물 없는 생활환경조성) 확충사업 준공: ‘22. 1. 14.

❍ 활성화계획 변경(경미한 변경) 승인 고시: ’22 1. 20.

❍ 장성 탄탄마을 쏠라마켓 확충사업 시행: ‘22. 3. 18.

❍ 탄탄 나눔센터 주차장 정비공사 시행: ’22. 4. 18.

❍ 장성 탄탄마을 쏠라마켓 준공: ‘22. 6. 20.

❍ 생활SOC복합시설 공사기간 연장 검토보고: ’22. 7. 12.

❍ 장성 탄탄마을 생활편의시설(안심담장, 안심쉼터) 준공: ‘22. 7. 29.

❍ 탄탄 작은영화제 상영 운영 용역 시행: ‘22. 8. 31.

❍ 장애물없는 생활환경조성 확충사업3차 시행 ‘22. 10. 20.

❍ 탄탄 마을관리사회적협동조합 운영 교육용역 시행: ‘22. 11. 21.

❍ 장성 탄탄마을 주민협의체 김장김치 나눔행사 추진: ’22. 11. 25.

□ 향후 추진계획

❍ 장애물 없는 생활환경조성3차 준공: ‘23. 6.

❍ 국민임대아파트 준공: ‘23. 10. / 생활SOC복합화 준공: ’23. 12.

ECO JOB CITY 태백 도시재생 뉴딜사업

에코잡시티촉진담당	이기태	담당자	김성진

○ 경제기반형 도시재생사업을 통해 일자리 창출 및 도시경쟁력 강화

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019~2024년(6개년)

❍ 위    치 : 태백시 장성동 226-6번지 일원

❍ 사 업 비 : 215,300백만원

(국 25,000, 도 5,004, 시11,696 공기업 57,800 민간 101,000, 부처협업 3,980, 자체지방비 10,820)

□ 추진실적

❍ 2022년 ECO JOB CITY 태백 1·2차 주민공모사업 11팀 추진: 2022. 6. ~ 10.

❍ 산림자원 수거센터 및 지역난방그리드 기본 및 실시설계 추진: 2022. 7. ~

❍ 스마트팜 ‧ 식물공장 조성공사 착공: 2022. 7. ~

❍ 통합 문화플랫폼 건립공사 추진: 2022. 7. ~

❍ 진입도로 개설공사 추진: 2022. 7. ~

❍ 광산공원 조성 기본 및 실시설계 추진: 2022. 8. ~

□ 향후 추진계획

❍ 친환경 산림재생 에너지타운 조성사업 기본설계 준공: 2023. 3.

❍ 진입도로 개설공사 준공: 2023. 3. ~

❍ 스마트팜‧식물공장 및 가공시설 준공: 2023. 5.

❍ 광산공원 조성 기본 및 실시설계 준공: 2023. 6.

❍ 도시재생 프로그램 운영 및 주민공모사업 추진: 2023. 1. ~ 10.

❍ 에코잡시티 태백 통합 문화플랫폼 준공: 2023. 9.

청정고원 스포츠센터(고원3체육관) 건립사업

스포츠레저담당	심기원	담당자	홍령건

□ 사업개요

❍ 사 업 명: 청정고원 스포츠센터(고원3체육관) 건립사업

❍ 위    치: 태백시 문곡동 1번지 일대(고원체육관 후면_

❍ 사 업 비: 12,500백만원(지역소멸기금 10,000백만원 시비 2,500백만원)

❍ 사업기간: 2022. 9. ~ 2025. 12.

❍ 사업내용: 지상 2층 규모 다목적 경기장 및 배드민턴 경기장

❍ 사 업 량	(단위: ㎡)
▸ 연면적  3,000㎡, 지상 2층 규모 건물 조성

▸ 지상 1층: 탁구 등 다목적경기장, 사무실, 휴게실, 화장실 등

- 다목적 구장(탁구대 20면 이상) 800㎡, 사무실 및 휴게실 250㎡

화장실 100㎡, 탈의실 및 보관실 100㎡, 기계실 등 250㎡

▸ 지상 2층: 배드민턴코트 9면 또는 다목적 경기장 1,500㎡

□ 추진실적

❍ 지방소멸대응기금 투자계획 확정	`22. 8.

❍ 공유재산 심의 의결	`22. 8. 30.

❍ 강원도 지방재정투자심사위원회 심사	`22. 10. 5.

▸심사 결과: 조건부 승인(2단계 심사)

↳ 실시설계용역 완료 후 계약체결 이전에 재심사 의뢰

❍ 국유림 사업부지 관련 업무협의	`22. 10. 20.

□ 향후 추진계획

❍ 도시관리계획 변경 용역 및 결정	`23년 상반기

❍ 건축기획 용역	`23. 2. ~ `23. 6.

❍ 설계공모 계획 수립 및 추진	`23. 5.

❍ 실시설계용역	`23 8.