창업지원센터 건립

청년정책팀장	신채영	담당자	정의정

○ 청년 창업기반 조성 및 신규 일자리 창출, 청년 유출 방지 및 지역 정착 도모

○ 청년을 위한 프로그램 운영을 통한 청년 역량 강화

□ 사업개요

❍ 사업위치: 장성동 210-32 일원

❍ 사 업 비: 1,430백만 원(도 1,000, 시 430)

❍ 사업기간: 2021년 ~ 2024년(4년)  *공사기간: 2023. 3. 20. ~ 11. 14.

※ BF본인증에 따른 사업기간 연장

❍ 사업내용: 태백 청년센터 구축

- 공유공간 1실, 상담실 1실, 관리사무실 1실, 비품실 1실, 멀티룸 1실, 창업공간 4실, 휴게데크 등 조성

□ 추진실적

❍ 강원도 지역균형발전 시범사업 공모 선정: 2021. 4. 12.

❍ 공유재산심의회 심의·의결: 2021. 8. 17.

❍ 건축공사 기본 및 실시설계용역: 2021. 9. 29.

❍ 일상감사 및 계약심사 완료: 2022. 9. 1.

❍ 실시설계용역 준공: 2022. 10. 26.

❍ 공사준공: 2023. 11. 14.           ※ 태백 청년센터 준공식: 2023. 11. 24.

❍ 청년센터 기간제 근로자(시설관리) 채용: 2024. 2. ~

❍ BF 본인증 획득: 2024. 3. 18.

❍ 청년센터 기간제 근로자(센터운영) 채용: 2024. 4. ~

❍ 청년센터 개소 및 청년수요 맞춤형 프로그램 운영 등: 2024. 5. 21. ~ 6. 13.

❍ 태백 청년센터 관리·운영의 민간위탁료 원가산정 용역: 2024. 4. ~ 6.

□ 향후 추진계획

❍ 수탁기관 공개모집 및 계약체결 등: 2024. 10 ~ 12.

❍ 수탁기관 운영: 2025. ~

태백 고원 힐링 캠핑장 조성

공공사업팀장	이정훈	담당자	손광우

○ 폐광으로 낙후된 철암권역 주민들의 지역경기 활성화 및 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

❍ 사업추진 근거: 「강원도 폐광지역 중장기 발전 기본계획」

❍ 사업기간: 2020~2024 (5년)

❍ 사업위치: 태백시 철암동 103번지 일원

❍ 총사업비: 9,727백만 원(도기금 5,512, 시기금 1,150, 시비 3,065)

❍ 사업내용

- 캠핑장 조성 [38,340.5㎡, 야영시설, 여가시설, 관리시설, 부대시설]

: 고정식 카라반 12대, 이동식 카라반 28개소, 백패킹 13개소

□ 추진실적

❍ 기본계획 수립	2020. 07.

❍ 강원도 투자심의 결정	2020. 11.

❍ 도시계획시설(공원) 결정	2022. 06.

❍ 기본 및 실시설계용역 추진	2021. 11.~2022. 12.

- 토목·조경, 건축, 기계설비

❍ 공사(토목·조경) 착공	2023. 01.

❍ 실시설계용역 추진	2023. 02.~2023. 04.

- 전기, 통신, 소방

❍ 공사(전기, 통신, 소방) 착공	2023. 10.

❍ 공사(건축, 기계설비) 착공	2023. 12.

□ 향후 추진계획

❍ 태백 고원 힐링 캠핑장 조성사업 준공	2024. 08.

청정고원 스포츠센터(고원3체육관) 건립사업

스포츠레저담당	김성겸	담당자	유준희

□ 사업개요

❍ 사 업 명: 청정고원 스포츠센터(고원3체육관) 건립사업

❍ 위    치: 태백시 문곡동 1번지 일대(고원체육관 후면)

❍ 사 업 비: 17,500백만원(지역소멸기금 15,000백만원 시비 2,500백만원)

❍ 사업기간: 2023. 1. ~ 2026. 10.
❍ 사업내용 : 연면적  3,477㎡ / 지하 1층, 지상 2층 규모 건물 조성

▸ 지하 1층: 기계실 150㎡

▸ 지상 1층: 다목적 구장(탁구대 20면) 1,250㎡, 사무실 및 강사실 80㎡

화장실 65㎡, 탈의실 및 보관실 195㎡

▸ 지상 2층: 배드민턴코트(9면) 또는 다목적 경기장 1,500㎡

□ 추진실적

❍ 지방소멸대응기금 투자계획 확정	`22. 8.

❍ 공유재산 심의 의결	`22. 8. 30.

❍ 강원도 지방재정투자심사위원회 심사	`22. 10. 5.

▸심사 결과: 조건부 승인(실시설계용역 완료 후 계약체결 이전에 재심사 의뢰)

❍ 도시관리계획 변경 용역 및 결정	`22. 10. 20.

❍ 건축기획 용역	`23. 2. 27. ~ `23. 6. 6.

❍ 설계공모 계획 수립 및 추진	`23. 5. 8.

❍ 실시설계용역	`23. 8. ~ 추진중

❍ 강원도 지방재정투자심사위원회 심사	`23. 11. 20.

❍ 소규모 재해영향평가 및 환경영향평가	`23. 11. ~ 추진중

□ 향후 추진계획

❍ 건설기술심의, 계약심사, 일상감사, 투자심사	`24. 9.

❍ 건축공사 계약 의뢰 및 계약추진	`24. 10.

❍ 공사 착공	`24. 12.

사계절 힐링 레저파크 조성 사업

복구지원팀장	전형철	담당자	임종만

○ 국민적 관광 트렌드 변화에 맞춰 전국에서 “여름에 가장 살기 좋은 태백” 컨셉에 부합하는 힐링도시 가족여가시설 조성사업과 연계하여 특색있는 사계절 레저파크 조성

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2022. 5. ~ 2025. 12.

❍ 총사업비: 5,900백만원(도기금 1,975 / 시기금 1,975 / 시비 1,950)

❍ 위    치: 태백시 황지동 466-4번지 일원(절골가든 맞은편)

❍ 사 업 량: 물놀이시설 1식, 편의시설 1식

□ 추진실적

❍ 지방재정투자심사 완로: 2022. 11.

❍ 2022년 공유재산관리계획 수립 : 2022. 12.

❍ 토지분할 측량 및 감정평가 완료: 2023. 7.

❍ 기본 및 실시설계용역 착수: 2023. 10.

❍ 보상협의(토지 8필지, 건물 1동, 기타 1건): 2023. 11.

- 보상완료 토지 7필지, 건물 1동, 기타 1건

□ 향후 추진계획

❍ 기본 및 실시설계용역 완료: 2024. 9.

- 폐기금 중 도비 분 확보 후 25년 공사 착공

첫생명맞이&아이키움센터 건립

건강증진담당	유영옥	담당자	김창호

□ 사업개요

❍ 사 업 명: 첫생명맞이&아이키움센터 건립

❍ 위    치: 태백시 황지동 428-2외 2필지(서학골 시유지)

❍ 사 업 비: 5,063백만원(기금 4,000, 시비 1,063)

❍ 사업기간: 2022. 9. ~ 2025. 8.

❍ 사업내용: 첫생명맞이&아이키움센터(공공산후조리원) 신축

❍ 사업규모: 신축1개동(3층/976.94㎡), 모자동실(10실) 및 부대시설

구 분	면 적(평)	상 세 시 설 내 역
지상 1층	425m2	사무실, 식당, 세탁실, 아이키움센터 사무실, 프로그램실 등
지상 2층	534m2	산모실10실(음압 1, 장애인 1), 영유아실, 간호사실, 마사지실 등
기 타 (연면적 제외)	205m2	PIT층, 옥탑층(기계실, 물탱크실)

□ 추진실적

❍ 공공건축 기획용역: 2023. 4월

❍ 센터 부지 지형현황 측량: 2023. 4월

❍ 센터 부지 도시계획선 분할측량: 2023. 6월

❍ 기본 및 실시설계 용역: 2023. 9월

❍ 연접 국유지(428-18번지)매입: 2023. 9월

❍ BF 예이인증 용역 추진: 2023. 9월

❍ 첫생명맞이&아이키움센터 건립 건축, 토목 공사 계약: 2023. 12월

□ 향후 추진계획

❍ 건설사업관리(감독권한대행 등)조달청 입찰 의뢰 추진: 2024. 2월

❍ 기계, 전기, 통신, 소방공사 계약: 2024. 3월

❍ 건설사업관리단(감독권한대행 등) 용역 계약: 2024. 5월

❍ 첫생명맞이&아이키움센터 공사 재개: 2024. 8월

❍ 센터 운영에 관한 조례제정: 2024. 12.월 이전

❍ 센터 운영계획 수립 및 민간위탁 운영 추진: 2025. 3.월

❍ 센터 수탁기관 선정: 2025. 5월

❍ 센터 준공예정: 2025. 8월

❍ 첫생명맞이&아이키움센터 개소 및 운영 예정: 2025. 9월~

□ 기대효과

❍ 자녀의 출산과 양육을 책임지는 안전하고 출산 친화적인 환경조성으로 산후 돌봄 사각지대 해소 및 모성 건강증진

힐링도시 가족여가 시설 조성사업

복구지원팀장	전형철	담당자	전재탁

○ 국민적 관광트렌드인 캠핑시설과 물놀이 시설 등 가족 여가시설 조성을 통하여 “힐링의 도시 태백” 컨셉에 부합되는 새로운 관광명소 창출과 지역 경제 활성화 도모

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2020. ~ 2023.

❍ 사업위치: 태백시 황지동 466-4번지 일원(절골가든 맞은편)

❍ 총사업비: 5,458백만원(도비 2,000 / 시기금 1,370 / 시비 2,088)

❍ 사 업 량: 야영시설 및 부대시설

- 야영시설: 자동차형 14개소, 2층형그늘막 6개소, 텐트형 6개소, 일반형 4개소

- 부대시설: 관리사무소 1동, 공동 화장실 및 취사장 1동, 샤워시설 1동, 대형 놀이터 1개소, 소형 놀이터 2개소, 물놀이시설(하천) 1개소, 주차장 20면

□ 추진실적

❍ 힐링 캠핑장 조성공사 착공: 2022. 12. 27.

❍ 힐링 캠핑장 조성공사 준공: 2023. 12. 24.

□ 향후 추진계획

❍ 시설물 이관(안전과→문화관광과): 2024. 8.

❍ BF인증 용역 완료: 2024. 12.

낙동강발원지 힐링시티타워 조성

공공사업팀장	이정훈	담당자	유환봉

○ 태백시 중심 지역인 황지시내와 문화예술회관을 연결하는 타워 브릿지를 건립하여 황지권 관광자원의 이용률을 높이고 도시 랜드마크로 활용

□ 사업개요

❍ 사 업 명: 낙동강발원지 힐링시티타워 조성

❍ 위    치: 태백시 황지동 49-225번지 일원

❍ 사 업 비: 10,246백만원(폐기금/도비 5,159, 시비 4,287, 특교 800)

❍ 사업기간: 2021~2024

❍ 사업내용

- 타워 1식(B=9~21m, H=43m) 및 연결보도교 1식(B=3.5m, L=80m)

□ 추진실적

❍ 낙동강발원지 힐링시티타워 기본구상 건립 용역: 2019. 11.~2020. 2.

❍ 투자사업 심의 결정(강원도) 및 중장기 지방재정계획 반영: 2020. 11.

❍ 기본 및 실시설계 용역: 2022. 1.~2022. 9.

❍ 지장물(전신주, 통신주) 이설요청: 2023. 2. 3.

❍ 지반조사용역 착수 및 준공: 2023. 2. 13.~4. 13.

❍ 제3회 태백시 공법선정위원회 개최: 2023. 7. 11.

❍ 태백시 기술자문위원회 개최: 2023. 11. 8.~11. 13.

❍ 경관심의위원회 개최: 2023. 11. 10.~11. 13.

❍ 특허 사용협약서 체결: 2023. 11. 16.

❍ 설계안정성 검토용역 완료: 2023. 11. 23.

❍ 도급공사 계약: 2023. 12. 29.

□ 향후 추진계획

❍ 도급공사 및 건설사업관리용역 착공: 2024. 1.

❍ 입체교차심의 개최: 2024. 2.

❍ 도시계획시설(주차장)사업 실시계획(변경)인가: 2024. 3.

❍ 철도보호지구 행위신고 조건부 수리: 2024. 5.

❍ 공사준공: 2025. 1.

웰니스 항노화산업 특화단지 조성사업 추진

공영개발팀장	김정태	담당자	김태용

○ 노화예방·치매치료 등 천연자원을 활용한 항노화 특화단지 조성으로 천연치유물 제조산업 입주 유치를 통한 6차 산업형 항노화 도시 기반 마련

□ 사업개요

❍ 위    치: 태백시 문곡동 산23-2번지 일원

❍ 사 업 비: 86,944백만 원

❍ 사업면적: 429,105㎡

❍ 사업내용

- 관광휴양시설: 힐링빌리지, 스포츠 빌리지, 캠핑장, 숲체험시설 등

- 공업용지: 항노화공방, R&D센터, 스마트팜

- 녹지용지: 소공원, 조성녹지 등

□ 추진실적

❍ 강원도 발전촉진형․거점육성형 지역개발계획 고시: 2018. 1. 5.

❍ 지역개발사업구역 등의 일괄 지정․승인 신청: 2022. 12. 9.

□ 추진계획

❍ 무연분묘 1차 개장 공고(45일간)	: 2023. 2. 14.~3. 30.

❍ 2023년 제2차 강원도 경관위원회 개최결과 알림(조건부가결): 2023. 3. 22.

❍ 공유재산관리계획 변경(안) 의결: 2023. 5. 4.

❍ 재해영향평가위원회 심의위원회 결과 알림(조건부 의결): 2023. 6. 15.

❍ 지역개발사업 재해영향평가 등 협의 승인 통보(심의완료): 2023. 7. 13.

❍ 환경영향평가 협의 의견(심의완료): 2023. 7. 21.