□ 주요 투자사업 추진현황

우리 태백시에서 ‘24년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

□ - 1 투자심사 대상사업

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2024년 집행사업비	2025년	2026년 이후
소도혈리~어평간국도확포장사업(신규)	20,000	-	1,000	200	18,800	2029	2024	10
태백제	422	-	422	424	-	연례반복	2024	100
대한태권도협회장배 전국 태권도대회	596	-	298	298	-	2024	2024	100
장성탄좌"클로징 &어게인100"	500	-	498	-	-	2024	2024	100
한강·낙동강 발원지 축제	978	-	978	1,038	-	연례반복	2024	100
2024년 강소형 스마트도시 조성사업	16,440	-	-	4,000	12,440	2026	2024	10
오투로(절골마을) 보도정비사업	2,300	-	100	500	1,700	2027	2024	23
태백 종합경기장 조명타워 설치	2,620	-	82.3	2,537.7		2025	2024	31
함태교~문곡소도동 주민센터간 보도정비공사	2,000	-	85	800	1,115	2025	2024	40
비와야폭포 로드길 조성사업	2,600	-	-	592	2,008	2026	2024	3
철암목욕탕 건립	2,400	-	4	2,396		2025	2024	70
대통령기 전국 단체대항 태권도대회	583	-	288	295	-	2024	2024	100
야구 전지훈련 및 대회	-	-	250	250	250	2026	2024	33
스노우 산악 마라톤대회	750	-	250	250	250	2026	2024	33
국무총리배 세계바둑선수권대회	562.5	-	252.5	310	-	2024	2024	100

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

소도혈리~어평간국도확포장사업(신규)

담당자

건설과

우재명(☎550-2360)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국도 확포장을 통한 지역간 균형발전 및 지역 경제 활성화와 이용자들에게 안전한 도로 환경 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. ~ 2029.(6년)

○ 위 치 : 태백시 문곡소도동 사내골 입구~어평마을

○ 규 모 : 도로확포장 L=5.2km, B=15.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,000백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	20,000	-	1,000	200	18,800
국 비	10,000	-	500	100	9,400
시 도 비
시군구비	10,000	-	500	100	9,400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2023. 3. 2.: 주한미군 공여구역주변지역 발전종합계획 변경(안) 주민공청회 개최

○ 2023. 3. 10.: 발전종합계획 변경(안) 제출

○ 2023. 12. 20.: 발전종합계획 변경(안) 확정

- 국비 확보(500백만 원)

○ 2024. 3. 15.: 중앙투자심사 자료 제출

○ 2025. 3. 17.: 실시설계용역 추진(‘25.3.17.~‘26.3.16.)

- 소규모 환경영향평가, 실시계획인가고시 등 행정절차 이행

- 손실보상 추진

□ 향후계획

○ 2025. 10. 14.: 주민공청회 개최 결과 보고 및 실시설계용역 반영

○ 2026. 3월 중: 공사 발주

사업명

태백제

담당자

문화관광과 배경숙(☎550-2677)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시민 참여프로그램, 문화예술공연 체험을 통한 소통과 화합의 장 마련

○ 제례행사 지원을 통해 지역 무형문화 계승 및 태백의 정체성 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 10. 1. ~ 2024. 10. 6.(6일간)

○ 위 치 : 태백종합경기장, 황지연못, 검룡소, 천제단 등

○ 규 모 : 심포지움, 제례행사(천데, 산신제, 단군제), 전야제(버스킹), 시민
화합행사(개회식, 명랑운동회, 폐회식), 태백가요제, 주민자치
경연대회 등 행사 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 422백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	846
국 비	-
시 도 비	-
시군구비	846		422	424
지 방 채	-
민간자본	-
기 타	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2024년 제1차 강원특별자치도 지방재정투자심사 완료: 2024. 2. 29.

○ 사업 추진 기본계획 수립: 2024. 8. 20.

○ 제43회 태백제 재해대처계획 수립: 2024. 9. 23.

○ 행사 추진: 2024. 10. 1. ~ 2024. 10. 6.

○ 2024년 제3차 강원특별자치도 지방재정투자심사 완료: 2024. 10. 4.

※ 2025년 총사업비 20% 증가에 따른 재심사

□ 향후계획

○ 2025년 제44회 태백제 행사 추진: 2025. 10. 2. ~ 2025. 10. 3.(2일간)

○ 태백 시민 화합행사로 연례 반복적으로 추진: 2026년 ~

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

대한태권도협회장배 전국태권도대회

담당자

스포츠과 김소영(☎550-2655)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국규모의 스포츠대회 개최로 선수단, 지도자 및 임원 등이 방문하여

관내 숙박업소, 식당, 관광지 이용으로 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 10. 22.(화) ~ 10. 31.(목) 10일간

○ 위 치 : 태백시 고원체육관

○ 규 모 : 선수 3,980명(격파 1,919명, 품새 2,061명), 임원 등 178명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 596백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	596		298	298
국 비
시 도 비
시군구비	596		298	298
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○ 10. 22.(화)~10. 31.(목) 제21회 대한태권도협회장배 전국 태권도 선수권

대회 개최 완료

□ 향후계획

○ 제22회 대한태권도협회장배 전국 태권도 선수권대회 개최 예정

- 25. 10. 28.(화)~11. 6.(목) 10일간 / 고원체육관

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

장성탄좌“클로징&어게인100”

담당자

문화관광과 함시진(☎550-2349)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대한민국 산업화의 출반점인 장성탄좌에서 100년의 석탄산업과 산업영웅의 마지막을 기억하고 녹색네어지 기반의 뉴산업화 출범을 통해 미래 100년의 새역사 창출을 다짐

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 9. 6.~ 2024. 9. 20.

○ 위 치 : 장성광업소(태백시 장성동 200-1)

○ 규 모 : 약 2,000여명 참가(폐광지역 근로자 및 시민)

- 장성광업소 폐광식 및 녹색에어지 출범식, 석탄산업 100년의 역사화 미래에너지 100년 기념 전시 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	498	-	498	-	-
국 비	-	-		-	-
시 도 비	249	-	249	-	-
시군구비	249	-	249	-	-
지 방 채	-	-		-	-
민간자본	-	-		-	-
기 타	-	-		-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 장성탄좌“클로징&어게인100” 추진계획 수립: 2024. 4. 16.

○ 2024년 제2차 강원도 지방재정투자심사 완료: 2024. 6. 26.

○ 장성탄좌 클로징&어게인 100특별위원회 출범: 2024. 8. 8.

○ 행사용역 추진: 2024. 9. 6. ~ 2024. 10. 24.

※ 본행사: 2024. 9. 6. / 전시행사: 2024. 9. 6.~ 2024. 9. 20.

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

한강·낙동강발원지 축제

담당자

문화관광과 함시진(☎550-2349)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대한민국 양대강의 발원지 및 수계라는 지역의 특이성을 반영한 축제를 기획하여 태백의 대표 관광 축제로 육성

○ 기후온난화에도 불구하고 열대야가 없는 대표적인 도시라는 선선한   기후적 이점을 활용하여 여름철 외부 관광객을 적극적으로 유치

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 7. 27.~ 2024. 8. 4.(9일간)

○ 위 치 : 태백 황지연못 문화광장, 통리 오로라파크, 구문소 마을 등

○ 규 모 : 개막식(축하공연), 워터 워킹 퍼레이드, 선선 워터 나이트, 쿨 시네마, 선선 맥주 페스티벌, 선선 펫스타, 벨리곰 브랜디드 콘텐츠,선선 쿨(Cool)크닉, 수계도시 릴레이 아트 플레이, 공연 및 체험 이벤트 등 행사 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 978백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,016	-	978	1,038	-
국 비	-	-		-	-
시 도 비					-
시군구비	2,016	-	978	1,038	-
지 방 채	-	-		-	-
민간자본	-	-		-	-
기 타	-	-		-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2024년 제2차 강원도 지방재정투자심사 완료: 2024. 6. 26.

○ 안전관리계획 심의 완료: 2024. 7. 16.

○ 축제 세부실행계획 수립: 2024. 7. 17.

○ 행사 추진: 2024. 7. 27.~ 2024. 8. 4.

○ 2025년 제10회 한강·낙동강발원지 축제 추진: 2025. 7. 25.~ 8. 3.

□ 향후계획

○ 태백시 대표축제로 연례반복적으로 행사 추진: 2026년~

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

2024년 강소형 스마트도시 조성사업

담당자

탄소중립과 권승규(550-2341)

□ 사업목적 및 필요성

○ 맞춤형 스마트도시 기술로 지역전략산업 육성 및 시민 체검형 정책추진

○ 시민 모두가 디지털 문화 혜택을 누릴 수 있는 디지털 포용 선도도시 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 8.~2026. 12.

○ 위 치 : 태백시 일원

○ 내 용 :

- 스마트 마이닝 혁신 기술 실증을 통한 전략산업 활성화 및 관련기업 유치

- 스마트 기술로 기후위기에 적극적으로 대응하는 친환경 산소도시 태백 구현

- 복잡 다양한  도시문제 해결의 데이터기반 체감형 시민중심 스마트도시 체계 마련

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  16,440백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	16,440	-	-	4,000	12,440
국 비	8,000	-	-	2,000	6,000
시 도 비	500	-	-	150	350
시군구비	7,500	-	-	1,850	5,650
지 방 채
민간자본	440	-	-	-	440
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2024년 강소형 스마트 조성사업 공모 선정: 2024. 6. 24.

○ 국토부·태백시 간 협약체결: 2024. 8. 21.

○ 국토교통부 사업이행 관련 협의: 2025. 1. 21.

○ 재공모 및 공모 업체 선정: 2025. 3. 6.~4. 16.

○ 실시계획 작성 및 제출(국토부): 2025. 5. 15.~6. 30.

□ 향후계획

○ 실시계획 국토부 승인: 2025. 9.한

○ 실시설계 용역: 2025. 10.~12.

○ 전체사업관리 PMO용역: 2025. 9.~2026. 12.

○ 사업착공 및 준공: 2025. 11.~2026. 12.

사업명

오투로(절골마을)보도정비사업

담당자

건설과 구태영(☎550-2319)

□ 사업목적 및 필요성

○ 절골마을 보도 정비를 통하여 시민들의 보행 환경 편의 증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 6. ~ 2027. 12.

○ 위 치 : 황지동 466-21번지 일원

○ 규 모 : 보도정비 및 확장 L=1.42km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비			100	500	1,700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 23%)

○ 실시설계용역 추진: 2024. 6. ~ 12.

○ 공사 1차분(L=325m) 완료: 2025. 4. 16. ~ 9. 2.

□ 향후계획

○ 공사 2차분(L=195m) 추진: 2025. 10. ~ 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

태백 종합경기장 시설 확충 사업

(태백 종합경기장 조명타워 설치)

담당자

스포츠과 최지만(☎550-2406)

□ 사업목적 및 필요성

○ 태백종합경기장 축구장(육상경기장)은 현재 조명타워 미설치로 야간 경기 불가

○ 조명탑 설치로 야간 스포츠대회 및 전지훈련단 유치 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 7. ~ 2025. 12. 31.

○ 위 치 : 태백시 연화산길 10

○ 규 모 : 종합경기장 조명타워 4기 설치 및 노후 시설물 보수

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,620백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,620		82.3	2,537.7
국 비
시 도 비	1,703		53.5	1,649.5
시군구비	917		28.8	888.2
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 31%)

○ 종합경기장 노후 시설 보수

- 야외화장실 개보수(2개소), 관리동 지붕 방수, 고원1구장 노후 조명 교체 등

○ 종합경기장 조명타워 설치공사

- 조명타워 설치 전기 도급공사 착공: 2025. 6. 4.

- 조명타워 설치 전기 감리 용역 착수: 2025. 6. 16.

- 조명타워 설치 관급자재 계약 업무 추진 중(조달청 계약 의뢰 완료)

□ 향후계획

○ 종합경기장 조명타워 관급자재 설치 계약 및 착수: 2025. 9.

○ 종합경기장 조명타워 관급자재 설치 사업 완료

□ 사업변경 내역(해당사항 없음)

사업명

함태교~문곡소도동 주민센터간 보도정비공사

담당자

건설과 우재명(☎550-2360)

□ 사업목적 및 필요성

○ 관내 보도정비를 통해 도시기반시설을 확충하고 지역균형 발전과 주거환경 개선으로 주민복리증진을 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 9. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 태백시 구함태초등학교 ~ 문곡소도동 주민센터

○ 규 모 : 보도정비(L=1.48km, B=3.0m, 아스콘포장)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,000		85	800	1,115
국 비
시 도 비
시군구비	2,000		85	800	1,115
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2024년 2회 추경 예산반영(실시설계용역): 2024. 8.

○ 주민설명회 개최: 2025. 3. 24.

○ 공사 착공(1차): 2025. 6. 25.

□ 향후계획

○ (1차)공사 준공: 2025. 10.

○ (2차)공사 추진: 2026. 1.

사업명

철암목욕탕 건립사업

담당자

국가정책추진실 우석형(☎550-3800)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장성광업소 폐광이후 광업소 욕장을 이용한 철암동 주민 및 인근 목욕탕 없는 주민들의 생활환경 개선 및 복지 증진을 위해 목욕탕 건립

□ 사업개요

○ 기 간 :  2024. 1. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 강원특별자치도 태백시 철암동 471-1(쇠바우골 탄광문화장터 주차장)

○ 규 모 : 연면적 356㎡(지상1층) 규모의 목욕탕 건립

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계
국 비 *특별교부세				600
시 도 비				500
시군구비			4	1,296
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70 %)

○ 주민설명회 개최: 2024. 3. / 2024. 4.

○ 철암 목욕탕 건립 기본계획 수립: 2024. 6.

○ 실시설계용역: 2024. 8. ~ 2025. 5.

○ 행정절차(일상감사,계약심사,공사업체 선정, BF 예비인증 등) 완료: 2025. 6.

○ 착 공: 2025. 6. 25.

□ 향후계획

○ 준 공: 2025. 12. 21.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간 변경: 당초) 2024. 1 ~ 2025. 7. → 변경) 2024. 1 ~ 2025. 12.

(BF(장애물없는 생활환경 인증제도) 예비인증으로 인한 설계 용역 지연)

사업명

대통령기 전국 단체대항 태권도대회

담당자

스포츠과 김소영(☎550-2655)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국규모의 스포츠대회 개최로 선수단, 지도자 및 임원 등이 방문하여

관내 숙박업소, 식당, 관광지 이용으로 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 7. 31.(수) ~ 8. 9.(금) 10일간

○ 위 치 : 태백시 고원체육관

○ 규 모 : 선수 3,543명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  583백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	583		288	295
국 비
시 도 비
시군구비	583		288	295
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○ 7. 31.(수) ~ 8. 9.(금) 제60회 대통령기 전국 단체대항 태권도 대회

(품새, 격파) 대회 개최 완료

□ 향후계획

○ 제60회 대통령기 전국 단체대항 태권도대회(품새, 격파) 개최

- 25. 7. 30.(수)~8. 8.(금) 10일간 / 고원체육관

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

야구 전지훈련 및 대회

담당자

스포츠과 김소보

(☎550-3982)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역대회 개최를 통한 지역경제 활성화 및 생활체육 인프라 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 8. 23.~10.13.

- 고등부 대회기간: 8. 30.~9. 5.

- 중등부 대회기간: 9. 7.~ 9. 13.

○ 위 치 : 태백스포츠파크 A, B구장

○ 규 모 : 1,000여명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 750백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	750		250	250	250
국 비	375		125	125	125
시 도 비
시군구비	375		125	125	125
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 33%)

○ 제1회 태백시장기 전국 우수 중 ·고등학교 전지훈련 및 야구대회 개최(2024. 8. 23.~10.13.)

□ 향후계획

○ 2025~2026년 야구 전지훈련 및 대회 개최

□ 사업변경 내역

○ 해당내역 없음

사업명

스노우 산악 마라톤대회

(스노우 트레일런)

담당자

스포츠과 김종수

(☎550-2589)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역대회 개최를 통한 지역경제 활성화 및 생활체육 인프라 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. ~ 2026.

○ 위 치 : 태백산, 어평재, 함백산, 지지리골 일원

○ 규 모 : 1,000여명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 750백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	750		250	250	250
국 비	375		125	125	125
시 도 비
시군구비	375		125	125	125
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 33%)

○ 24년도 스노우 트레일런 대회 개최(2025. 1. 18.~19.)

□ 향후계획

○ 25년도 스노우 트레일런 대회 개최예정(2026. 1.~2월 중)

○ 26년도 스노우 트레일런 대회 개최예정(2027. 1.~2월 중)

□ 사업변경 내역

○ 해당내역 없음

사업명

국무총리배 세계바둑선수권대회

담당자

스포츠과 김소영(☎550-2655)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국제규모의 스포츠대회 개최로 선수단, 지도자 및 임원 등이 방문하여

관내 숙박업소, 식당, 관광지 이용으로 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 9. 20.(금) ~ 9. 26.(목) 7일간

○ 위 치 : 태백시 고원체육관, 태백호텔

○ 규 모 : 594명(선수 514명, 임원 80명)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  562.5백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	562.5		252.5	310
국 비	263		113	150
시 도 비	60		30	30
시군구비	239.5		109.5	130
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○ 경기장 및 주변시설 실사, 세부계획 수립: 24. 7.~8.

○ 24. 9. 20.(금)~9. 26.(목) 제19회 국무총리배 세계바둑선수권대회 개최

□ 향후계획

○ 제20회 국무총리배 세계바둑선수권대회 개최예정

- 25. 11. 8.(토) ~ 11. 14.(금) 7일간 / 고원체육관, 태백호텔

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

우리 태백시에서 ‘24년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 없습니다.

□ - 2 지방채 발행사업

우리 태백시에서 ‘24년에 추진한 민간투자사업 현황은 없습니다.

□ - 3 민간투자사업